「 선문화교육불교회관 건립공사 」

기본 및 실시 설계용역 과업지시서

2016. 9.

금정총림 범어사

목  차

제1장 공통사항	1

제2장 건축분야 과업지시서	15

제3장 기계․소방분야 과업지시서	26

제4장 전기분야 과업지시서	37

제5장 통신분야 과업지시서	46

제6장 조경분야 과업지시서	55

제1장 공 통 사 항

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 『선문화교육불교회관 건립공사 기본 및 실시설계용역』이라 한다.

2. 과업목적

가. 범어사를 찾는 국내외 관광객들에게 선문화 홍보 및 한국 전통사찰의 정수를 느낄 수 있는 문화콘텐츠 제공

나. 시민의 참여가 용이한 복합문화공간으로서의 선문화 체험공간조성, 관광자원화를 통한 지역 관광, 경제 활성화 도모

3. 과업의 범위

가. 위    치 : 부산광역시 금정구 청룡동 480번지 일원

나. 사업규모

1) 부지면적 : 약 14,789㎡

2) 건물규모 : 2개동 지상2층, 연면적 3,000㎡(±10% 범위 내 조정가능)

4) 용도 지역 : 제1종 일반주거지역, 제1종 지구단위계획구역,

문화재 보존영향 검토 구역

5) 주요 시설내용

가) 의무시설 : 공연장, 연회장, 다목적 강당, 회의실, 체험관, 카페테리아, 객실

나) 기타 부대시설 : 화장실 등

다) 의무 장애인시설 : 「장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률」제10조의2에 따른 장애물 없는 생활환경 인증 의무대상 및 제8조에 따른 편의시설 의무 설치

라) 국민건강증진법에 따라 시설공간뿐만 아니라 시설부지 전체를 금연 구역으로 지정(별도의 흡연구역 설치는 가능)

6) 추정 공사비 : 금6,500백만원 예정(부가가치세 포함)

가) 추정공사비는 건축(기계설비 포함), 조경, 전기, 통신, 소방분야 등에 대한 전체 공사비이며, 공종 간 배분하여 사업비 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함

다. 과업의 내용

1) 선문화교육불교회관 건립 공사 기본 및 실시설계

- 건축․토목․기계․전기․통신․소방 및 조경공사 등

2) 인․허가, 공사발주 등 제반 행정절차 이행에 따른 필요도서 작성 등

3) 기타 본 과업지시서에서 정하는 사항

라. 설계 시 고려하여야 할 사항

1) 본 사업의 공사비 예산은 6,500백만원이며 용역자는 예산 범위 내에서 최대한 경제적인 설계를 하여야 한다.

2) 범어사의 역사와 예술에 걸맞은 선문화교육불교회관이 될 수 있도록 외형적 시각 디자인(구조형태, 색채 등) 계획

3) 효율성 및 활용도를 최대한 높여 공간 활용을 극대화 할 수 있도록 배치하고 합리적인 동선체계를 구상

4) 자연통풍이 가능하고, 에너지 소비를 최소화 할 수 있는 에너지 절약형 설비 갖춘 설계

5) 선문화교육불교회관 진입 시 이용자(장애인, 노약자 등) 및 차량 통행에 불편이 없도록 가능한 범위 내에서 보행자 및 차량동선을 분리하는 등 안전하게 진입할 수 있도록 계획

6) 주요자재는 친환경적인 재료를 사용하여 유지관리비 절감, 내구성․경제성이 우수하고 가능한 사업기간 단축이 가능한 자재 및 공법을 사용하며, 부산지역 생산 건설자재를 우선 설계에 반영하여야 한다.

- 외장재는 자재성능 대비 경제성이 우수하며, 환경변화(염해 등)를 염두에 둔 자재선정 고려

4. 과업기간

가. 착수일로부터 60일간

나. 설계도서 작성기간은 아래와 같이 작성한다.

1) 기본설계도서 : 착수일로부터 30일 이내

2) 실시설계도서 : 기본설계 납품 후 30일 이내

다. 기타사항

용역추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우 발주기관의 승인을 득한 후 그 기간을 연장할 수 있다. 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무 및 관련 자료의 제출과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행하며, 다음 경우에 한하여 발주기관의 승인을 득하여 과업수행기간을 연장 할 수 있다.

1) 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

2) 발주기관의 방침에 의하여 과업시행이 중단되었을 경우

3) 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

(단, 발주기관의 추가적인 용역수행 요구에 의한 용역기간 연장 시 추가 용역에 대한 비용은 계약상대자와 협의하여 지급한다.)

4) 과업수행과 관련한 협의(협조)부서의 업무처리 지연으로 과업수행에 현저한 차질을  초래한다고 발주기관이 판단한 경우

5) 기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

5. 설계용역 담당 자격

가. 건축사법에 의한 건축사 면허소지자로 동법에 의하여 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

나. 기계, 전기, 통신, 소방, 토목, 조경설계에 의한 자격이 없는 경우 기계, 전기, 통신, 소방, 토목, 조경 관련법 등 엔지니어링사업법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 득한 자와 공동도급(분담이행)으로 시행하여야 하며, 기타 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링사업법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 득한 자가 설계하여야 함.

6. 과업 일반사항

가. 설계용역자의 성실 등의 의무

1) 설계용역자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며, 건축물 및 관련시설의 미관, 기능 및 구조상 지장이 없도록 설계하고 본 과업의 질적 향상에 노력하여야 한다.

2) 계약체결 후 7일 이내에 과업을 착수하여야 하며, 착수하기 전에 착수계․사업수행계획표․용역수행자 명단 및 이력서, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 범어사에 제출하여야 한다.

3) 착수 시 및 용역수행 중 범어사에서 담당 기술용역 수행자가 부적당하다고 판단될 경우 교체를 요청 할 수 있으며, 설계용역자는 이에 응하여야 한다.

4) 과업수행보고는 착수보고, 최종보고를 하여야 하며, 보고회시 제시된 의견 및 도출된 문제점을 검토 보완하여야 한다.

- 착수보고 : 30일 이내

- 최종보고 : 60일 이내

나. 보안 등

1) 설계용역자는 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 보고서등 기타 자료 및 이에 의하여 얻은 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 되며, 과업폐기물은 소각처리를 원칙으로 한다.

또한 과업수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 설계용역자가 진다.

다. 업무수행

1) 관련부서 협의 충실

설계용역자는 본 과업을 수행함에 있어 관련기관과 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토 반영하여야 한다.(필요시 협의록 작성, 제출)

2) 설계자료 조사 성실

설계용역자는 기본 및 실시설계 등을 진행함에 있어 충분한 자료를 수집․검토하여 설계의 질을 높여야 하고, 안전하고 경제적이며 에너지절약형의 최신 시설이 되도록 노력하여야 하며, 범어사에서 필요하다고 할 경우 유사한 시설물을 현장 견학하여 외관, 기능, 마감자재, 유지관리, 문제점 등을 검토 분석한 후 설계에 반영 및 그 결과를 제출하여야 한다.

3) 회의참석 등

설계용역자는 본 과업과 관련된 해당 심의(자문)위원회 개최 시에는 참석․설명하고, 각 분야별 기술사항에 대하여 책임기술자로 하여금 질의에 답변토록 하여야 한다.

4) 보고 등 의무 성실

가) 설계용역업자는 아래 각 사항에 대하여 일반적인 사항 또는 당초 계획과 변경이 있을 경우 사전 보고한 후 검토된 자료에 의거 과업을 진행한다.

- 설계자료 또는 통계 조사연구 적용 및 개선 등에 관한 사항

- 새로운 기술도입에 관한 사항

- 설계용역과 관련된 홍보활동 및 간행물 발간 등

- 기술인력 구성에 관한 사항

- 기타 지시받은 사항

나) 범어사가 본 과업 진행상 필요하다고 인정할 경우 관계전문가 및 관계기관의 자문을 들어야 한다.

다) 과업의 진척보고는 용역감독자를 경유하여 서면으로 보고해야 하며, 기본설계 및 실시설계 보고 등 용역감독자가 필요하다고 지시하는 경우 제반 추진 내용을 책임기술자가 직접 보고해야 한다.

라) 용역업자는 용역완료시까지 용역진행 상황 종합점검을 위하여 발주자 필요시 개최되는 최소 3차례이상의 보고회에 성실히 진행사항을 보고해야 한다.

5) 자료제출 성실

가) 설계용역업자는 과업수행 중 심의회 등을 위하여 자료제출 요구가 있을 시 이에 응하여 제출하여야 하며, 자료제출 등으로 인한 비용은 설계 용역업자가 부담한다.

나) 심의(자문)위원회 결과 지적사항이 있을 때에는 설계용역업자가 보완하여 납품하여야 한다.

6) 용역착수 시 제출서류

설계용역업자는 계약 후 7일 이내 아래와 같이 서류를 구비하여 제출하여야 한다.

가) 설계수행 예정공정표

나) 설계용역 수행 기술진 구성 현황

공종별(건축, 전시, 기계, 전기, 통신, 조경, 토목, 교통, 기타) 명단, 자격증 사본, 이력서

다) 보안각서

7) 공종별 하도급 용역을 하여야 할 경우 관련법에 의한 전문설계 용역업체에 하도급을 하여야 하고, 하도급 신고를 필하여야 하며, 하도급 용역업자의 기술진 현황을 제출하여야 한다. 일반설계용역업체일 경우에는 승인을 득한 후 하도급을 하여야 한다.

8) 설계용역업자는 설계 전 반드시 용역감독자와 같이 현장 확인하여 각종 인입위치, 냉․난방부하 분석 등 현장여건 등을 충분히 검토하여 설계에 반영한다.

라. 관련사항 숙지의무

1) 본 과업지시서 내용과 본 용역시행 관련 전반적인 사안을 숙지하여야 하며, 숙지하지 아니하여 발생하는 사안에 대하여는 설계용역업자가 책임을 진다.

2) 본 과업지시서에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 범어사와 협의하여야 하며, 이견이 있을 경우 용역감독자의 의견에 따른다.

3) 기타 경미한 사항은 협의하여 시행하며, 이에 소요되는 비용은 설계용역업자가 부담한다.

4) 본 과업을 수행함에 있어 설계용역업자는 제반 여건조치를 하여야 하며, 본 과업으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 설계용역자가 손실 보상을 하여야 한다.

5) 설계용역업자는 각종 행정절차상의 승인, 협의, 인․허가를 완료할 수 있도록 제반 조치를 취하여야 하고, 필요시 관계기관의 협의에 따른 필요한 보완 관련 자료를 작성 제출하여야 하며, 납품 후라도 행정절차 이행이 완료되어야 본 용역 과업이 완료된 것으로 본다.

6) 용역감독자는 과업 수행 중 설계용역업자의 고용인이 과업수행에 부적당하다고 인정할 때는 즉시 교체를 명할 수 있다.

7) 본 용역설계에 의하여 공사 시행중 설계과업지침서에 당초 있었음에도 불구하고 주요사항이 누락되어 설계변경이 필요한 경우 즉시 설계변경을 이행하여야 하고 이에 따른 대가를 요구할 수 없다.

8) 설계도서 작성은 건설교통부 고시 제2003-11호(‘03.1.24)의 설계도서 작성 기준에 의하여 작성하여야 하며 설계도면에 설계자, 제도자, 검수자, 확인자 등의 설계도서 작성자 서명 날인하여야 한다.

9) 본 설계에 적용하는 모든 자재 중 우리 시에서 생산 가능한 제품은 우선 적용하여야 한다.

마. 용역기간 연장

다음과 같이 부득이한 경우에는 용역기간을 연기할 수 있다.

1) 추가과업, 특별업무수행, 조사물량 증가 등으로 용역기간 연장이 불가피한 때

2) 각종심의, 협의, 범어사의 사정으로 작업 중지 또는 연기의 필요가 있을 때

3) 천재지변 등 기타 부득이한 사정으로 연기가 불가피하다고 범어사가 인정할 때

바. 변경 및 정산

1) 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정할 때에는 설계용역업자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 설계용역업자는 범어사의 방침에 따라야 한다.

2) 과업범위의 증감이 발생할 경우는 당해 계약금액을 조정 또는 정산의 근거는 별첨“설계용역 설계예산서”에 따른다. 계약 후 당초 설계비를 산출할 때보다 설계비 산출 공사비가 감소 될 경우 또는 설계 용역비를 산출할 때 하자가 있었음이 발견되었을 때 발주청은 계약된 용역비를 감액 조치할 수 있으며, 과업 범위의 증가가 발생할 경우는 당해 계약금액을 조정 또는 정산한다. 다만, 과업범위의 현저한 변경 없이 기본설계 또는 실시설계 결과 과업제시기준 공사비를 초과한 범위에 대하여는 용역비의 증액지급이 불가하다.

3) 다만, 용역발주심의에서 제시된 내용을 반영할 경우 예산범위 내에서 설계변경 및 정산을 할 수 있다.

4) 용역업자는 설계 납품완료 이후라도 설계용역비가 과다, 누락, 오류 등으로 인하여 과다 계상 되었다고 인정되어 발주청의 변상조치 요구 시에는 즉시 이를 이행하여야 한다. 이에 용역업자는 민․형사상 소를 제기할 수 없다.

사. 특별 의무사항

1) 설계용역업자는 성과품 납품 후에라도 시공 시 합동회의, 각종 도면요구 등 범어사의 자문에 성실히 응하여야 하며, 과업수행 서류에 위 내용을 포함한다.

2) 본 용역설계에 의한 공사시공 중 설계용역업자의 설계부실 등 하자로 인한 피해발생시 설계용역업자가 변상한다.

아. 기타사항

1) 용역수행자의 교체

가) 이 용역에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며 용역감독자가 용역(과업)의 적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우 그 교체를 요구할 수 있으며 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

나) 이 용역에 참여하는 기술자가 퇴직 또는 기타의 다른 사유로 용역(과업)을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등한 자격을 갖춘 기술자로 범어사의 승인을 받은 후 즉시 교체한다.

2) 설계도서 작성 시 유의 사항

가) 시방서에 건설업자가 공사 진행 단계별로 작성하여야할 시공 상세도 목록 및 시공 상세도 작성기준을 제시하여야 한다.

나) 신기술 적용가능여부를 검토하여 설계보고서에 수록․제출하여야 한다.

다) 각종 기초시설물은 □부산광역시 도시기초시설물 설치․관리기준□에 따라 설계하여야 한다.

라) 공사완료 후 특수한 운영(과정)에 대하여는 유지관리지침이 작성되도록 검토하여 설계한다.

마) 건축설계공모 및 전시물제작․설치 제안 공모결과에 대하여 당선작에 대한 심사위원 개선점에 대해서는 기본․실시설계 시 반영 조치하여야 한다.

7. 적용 규정 및 설계 기준

가. 각종 규정 및 설계기준

가장 최근의 자료를 적용하고, 관련규정 및 설계기준이 개정된 경우 동 관련규정 및 설계기준 등에서 규정하는 바에 따라 적용여부를 판단하며, 특별히 규정되지 않은 사항은 발주청과 협의하여 적용한다.

나. 공통분야

1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령

2) 건설기술진흥법

가) 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정

나) 부산광역시 건설기술심의위원회조례

3) 건설산업기본법

4) 자연재해대책법

5) 엔지니어링산업진흥법

6) 부산광역시 건설신기술 활용촉진에 관한 조례

7) 환경정책기본법

8) 자연환경보전법

9) 시설물의 안전관리에 관한 특별법

10) 도로법령 : 도로의 구조․시설기준에 관한 규칙

11) 하수도법령

12) 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률

13) 산업안전보건법령

14) 경관법, 금정구 경관조례

15) 부산광역시 범죄예방 도시디자인조례

16) 부산광역시 도시기초시설물 설치관리기준

17) 보도설치 및 관리지침

다. 조경분야

1) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

가) 도시계획시설의 결정․구조 및 설치 기준에 관한 규칙

2) 공원녹지 관계법령

가) 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 부산광역시도시공원및녹지등에 관한 조례 및 시행규칙, 부산광역시 가로수조성 및 관리조례 등

3) 체육시설의 설치․이용에 관한 법률

4) 기타 관련법규, 국토교통부 표준시방서 및 지침서 등

라. 토목분야

1) 콘크리트구조 설계 기준, 콘크리트 표준시방서, 토목공사 표준일반시방서, 구조물 기초 설계 기준, 도로 설계기준, 지하매설물 안전관리 요령, 도로조명기준 KSA3701

2) 도로안전시설 설치 및 관리지침(국토교통부)

3) 보도설치 및 관리지침(국토교통부)

4) 콘크리트포장 생산 및 시공 지침(국토교통부)

5) 보도공사 설계시공유지관리 매뉴얼(부산광역시)

6) 건설공사 비탈면 설계기준(국토교통부)

7) 하수도정비기본계획(부산광역시)

8) 자전거 이용시설 및 관리지침(국토교통부)

9) 기타 관련 표준시방서, 지침서, 기준

마. 전기, 정보통신, 기계분야

1) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기용품 안전관리법, 전기통신 기본법, 정보통신공사업법, 전파법, 소방기본법 등 관련법규, 전기설비 기술기준, 내선규정, 기타 관련법규 및 표준시방서, 지침서,

2) 에너지이용합리화법, 소방기본법, 건축법, 수도법, 기타 관련법규 및 표준시방서, 지침서, 기준

8. 관계기관 협의 및 인․허가

계약상대자는 과업수행과 관련하여 유관기관의 협의 및 인․허가에 필요한 자료를 설계공정 진행에 따라 발주청이 필요에 따라 요구한 시점 및 시기에 작성 제출하여야 하며(인․허가 및 협의주체는 발주청) 제출된 자료에 대하여는 계약상대자가 책임진다.

9. 용어의 해석 및 문장의 구성

과업지시서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주청과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 하며, 협의된 해석은 서면으로 작성한다.

가. 성과품 작성에 사용하는 용어

1) 계약조건에서 정의, 사용한 용어

2) KS 등 표준규격에서 정의, 사용한 용어

3) 기술용어사전에서 정의, 사용한 용어

4) 정부제정 제기준 용어

5) 기타 국어사전에서 정의, 사용한 용어

나. 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

1) 한글 맞춤법 (교육부)

2) 외래어 표기법 (교육부)

3) 기본 외래어 용어집

다. 성과품 작성에 사용하는 문장구성

1) 과업지시서에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치해야 하고 목적어가 빠진 문구사용 지양

2) 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용

3) 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장사용

4) 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적, 명령적 구술체 사용

라. 성과품 작성에 사용하는 용어의 표현방법

1) 애매한 표현 배제

가) “원칙적으로”, “대체로”, “충분한”, “관련○○” 등의 애매한 표현을 최대한 배제

2) 주어의 명확화

가) 주어, 서술어, 목적어를 명확히 구분하여 “누가”, “무엇을”, “어떻게” 해야 하는지를 명확하게 기술

나) “계약상대자는”, “용역감독자는” 등 주어 명시

3) 약어사용

가) 가능한 약어를 사용하지 말 것

나) 약어 사용이 필요한 경우 다음에 따른다.

- 건설업 분야에서 제정된 협약

- 사전에 수록되어 있는 약어

- KS 규준 및 기타에서 사용되고 있는 일반적인 약어

- 규준 및 규격은 그 단체 및 기관 또는 제조회사에서 제정한 것

- 약어는 원 단어의 특성을 유지하는데 필요한 최소한의 문자 및 수로 구성

마. 성과품 작성 시 서술원칙

1) 문장내용은 간단명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피할 것

2) 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

3) 불가능한 사항은 규정하지 말 것

4) 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것

5) 정확한 문법으로 기재할 것

6) 예측보다는 직설적으로 서술할 것

7) 공법과 결과를 모두 기재하지 말 것

8) 모순된 항목은 배제할 것

9) 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것

10) 정확하고 통일된 용어를 사용할 것

11) KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

12) 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피할 것

10. 저작권 관련사항

가. 용역계약에 의해 수행된 용역사업의 결과물에 대한 저작재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집저작물의 작성권은 부산광역시 금정구가 소유하며, 부산광역시 금정구는 정책상 연구 결과물의 내용을 일부 보완 또는 수정할 수 있다.

나. 계약상대자가 이 용역사업의 결과물에 대한 저작재산권을 사용하고자 할 경우 부산광역시 금정구의 동의를 받아야 하며 무단으로 사용 시에는 관련법에 의거 조치될 수 있으므로 유의하여야 한다.

다. 계약상대자가 용역수행과정에서 필요시 타 자료 등을 사용할 경우 저작재산권 여부를 확인하고 저작재산권자의 동의를 얻어야 하며, 동의 없이 사용하여 발생하는 저작재산권상의 제반 문제는 계약상대자가 책임져야 하며, 이로 인하여 용역결과물에 손해가 발생할 경우에도 계약상대자는 손해를 배상하여야 한다.

11. 특기사항 및 설계 시 고려되어야 할 사항

가. 특기사항

1) 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유로 정상적인 과업수행이 불가한 경우는 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

2) 과업지시서 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여  결정하되, 협의 불가 시는 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(안전행정부)에 따른다.

3) 기타 당해용역의 추진경위에 대하여 보고서에 반드시 명기한다.

나. 설계 시 고려되어야 할 사항

1) 안전성, 경제성, 시공 및 유지관리가 용이하도록 한다.(Life Cycle Cost 검토적용)

2) 설계변경 및 공사비 증액요인을 최소화하도록 한다.

3) 환경 친화적 공사를 위한 공법 및 적용기준을 제시한다.

(주변경관 파괴, 토양오염, 소음, 진동 및 분진 등의 발생 최소화 등)

4) 건설폐자재 중 재생 가능한 친환경자재 활용방안, 에너지절약안을 검토․제시한다.

5) 사계절 이용할 수 있는 선문화교육불교회관이 될 수 있도록 설계에 반영한다.

6) 식생수로(도로, 콘크리트 배수로를 식생형 수로로 조성), 빗물조성(볼록한 화단 등을 오목한 지형으로 조성), 빗물침투시설(침투통, 침투트랜치, 침투측구, 투수성포장 등)등 설치를 검토하여 적극 반영한다.

7) 석면 발생 시 관련 법령에 적법하게 처리될 수 있도록 검토하여 반영하고 공사비 산출시 이와 관련된 내용을 포함한다.

8) 이 계획으로 인한 일시적 사유지 저촉, 진․출입 장애에 따른 민원 대처방안 및 환경피해 최소방안 검토․제시한다.

9) 설계에 적용 가능한 건설 신기술의 공법 및 적용기준을 제시한다.

10) 발주청과 시공자간의 클레임 발생이 최소화하도록 설계 도서를 작성한다.

11) 공사시방서에 시공 상세도면의 목록을 제시한다.

12) 우기·동절기 등 공사 중지 기간 및 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증으로 시민불편 유발 여부 등을 충분히 고려하고 시공전문가 참여하여 적정 공사기간을 산정한다.

다. 설계 시 주의사항

1) 사업규모 및 현장여건에 적합하게 종합적으로 고려하여 계획한다.

2) 사업부지내의 식재공간의 확보 등의 측면에 가능한 보존․이용하는 것을 원칙으로 한다.

3) 시설물의 설치는 인접주택 등의 프라이버시 침해 등 민원발생소지가 없도록 계획하여야 한다.

4) 지질 상태를 충분히 고려하여 안전한 기초 및 구조를 설계한다.

5) 사업부지외의 주변 배수체계를 고려하여 집수면적을 검토하고 배수계획에 반영한다.

6) 조경, 토목, 전기 등 각 공종간의 계획이 서로 상충됨이 없도록 하여야 하며 공종 간 시공한계가 명확히 구분되어야 한다.

7) 본 설계 용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다. 단 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주청과 협의 후 채택한다.

8) 모든 방부목재에 대하여는 규격이나 품질을 표시하며, 방부목재 반입 후 절단, 천공, 대패질 등 현장 가공할 경우 방부효과가 저해되므로 완제품 상태로 가공해 방부하도록 명시한다.

9) 방부처리 목재의 품질확보를 위하여 국립산림과학원 '품질인증제품'을 우선 사용하고, 품질인증제품 사용이 어려울 경우, 산림청 규정에 의한 '품질표시 제품'을 사용하도록 명시한다.

10) 인체에 유해한 물질(예 석면 등)이 함유된 자재는 사용하지 않도록 하며, 필요시 석면함유 시험성적서를 제출한다.

제2장 건 축 분 야

【기본설계】

1. 과업의 범위

가. 실시설계의 구체적인 내용이 실현되기 위한 기본이 되는 설계도 등을 작성하는 것을 말함.

나. 건축설계경기 당선작에 대한 기본설계도서를 작성하여 제출하여야 함.

2. 관계법규 조사

가. 건축협의, 심의, 승인 등 건축관련 제반법규

나. 건축디자인 등 경관 및 디자인관련 제반법규

다. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

라. 건축물의 에너지 절약 설계기준 등 제반법규

마. 소방시설공사업법 및 소방관련 제반법규

바. 폐기물 관련법규

사. 주차장법 및 주차장 관련 제반법규

아. 전력기술관리법 동 시행령, 시행규칙

자. 정보통신공사업법 동 시행령, 시행규칙

차. 소방시설의 설계유지 및 위험물 제조소등 시설의 기준 등에 관한 규칙 등

카. 국토교통부 제정 각종 표준시방서 및 설계기준, 부산시 건설공사 설계지침서

타. 대체에너지 개발 및 이용․보급촉진 관련법규

파. 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법규

하. 도시기초시설물 설치․관리기준, 건설공사 관련법규 및 한국산업규격

3. 기본설계 용역수행

가. 용역수행자는 각종 심의 및 협의를 득하고 기본설계에 반영하여야 하며, 각종 공법에 대하여는 범어사와 충분히 검토한 후 결정하여야 한다.

나. 기본설계는 기본개념이 제반 법규 규정을 만족시켜야 하며 각종 조사를 실시하여 그 결과를 기본설계에 반영하여야 한다.

다. 검토내용

1) 건 축

가) 계획(안)에 대하여 견해를 달리할 때에는 타당성 등을 검토하여 범어사와 협의하고 설계에 반영하여야 한다.

나) 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화 되는 일이 없도록 설계한다.

다) 어린이 및 장애인이 이용함에 있어 불편이 없도록 경사로 등 모든 시설이 어린이 및 장애인 편의시설이 되도록 하고, 사용자 동선이 간결하면서, 이용에 불편이 없도록 하여야 한다. 또한, 안전사고 방지시설을 갖춘 설계를 한다.

라) 건축물의 구조계획 및 재료선정은 안전성, 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리, 염해방지 등을 종합적으로 고려하여 건물구조계획을 하며 건축구조기준 등에 따른 합리적인 설계가 되도록 한다.

마) 주변 환경과 조화된 배치계획, 건물의 특성을 고려한 입면계획, 그리고 시설이용에 편리한 평면계획, 주차계획을 수립하여 설계하고, 개략공사비를 산정 각종 심의자료를 작성하여야 한다.

바) 건축개념과 건축재료는 친환경적인 개념과 재료를 도입, 선정되도록 한다.

사) 기본설계 및 실시설계는 건물 내외장 색채계획을 수립하여 수행하도록 한다.

아) 내외장 마감자재는 경제적이고 내구성이 우수하며 유지관리측면에서 유리한 질감, 색채 등 자연친화적인 소재를 선택하여야 한다. 또한, 신축 후 발생이 예상되는 새집증후군에 대한 대책을 강구한다.

자) 재해시 안전하고 원활한 피난이 이루어질 수 있도록 피난 및 안전계획을 설계에 반영한다.

차) 범어사 재정여건에 따라 향후 시설의 증축계획을 고려하여 증축 예상부분에 증축에 대비하는 사전 대책(증축을 고려한 설계하중, Expansion joint 등)을 수립․ 반영하고 노약자 및 어린이들이 많이 이용하는 시설이므로 E/V 및 주차시설 등 편의시설 반영한 공간배치가 될 수 있도록 설계한다.

카) 공간계획 기준

향후 수요 등을 감안하여 기능을 원활하게 수행 할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 공간계획이 되도록 한다.

4. 개략공사비 산출

공사비 개략계산은 신빙성 있는 자료를 근거로 하여 실제 소요공사비와 근사치가 되어야 하며, 공사비산출은 아래와 같은  규정이 정해져 있는 것은 그 규정에 따르고 그렇지 못한 것은 관련 계산근거 및 자료를 함께 제출하여야 한다.

가. 공사비 계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙의 공사원가 계산에 의해 작성하여야 한다.

나. 공사비 적산은 표준품셈, 시중노임단가, 적산기준 및 부산광역시 건설공사 설계지침서, 발주청의 실적공사비 등에 의거 산출한다.

다. 특수공정은 제조원가 계산서 양식에 따른 서식으로 2개소 이상의 견적서를 받아 합리적인 단가를 택한다.

라. 제조원가에 의할 수 없는 공정의 단가는 전문가의 견적단가로 계산한다.

5. 작성도서

가. 건축법시행규칙 제6조 제1항 관련[별표2]에서 규정하는 도서

나. 부산광역시 건설공사 설계지침서에 의한 각종도서

다. 기타 필요한 도서(입면도는 4면 작성 : 전‧후‧좌‧우측면도, 단면도는 종단 면도 2면 이상, 횡단면도, 주계단 단면도, 외벽단면상세도 등)

6. 공사 공정표

가. 각 공종별로 단일화시켜야 하며, 이 공종들의 상관관계를 경로와 날짜가 나타나도록 공정표를 작성한다.

나. 특수공정은 작업의 시작과 종료시점에서 선행되어야 하는 작업명칭을 기입하여야 한다.

다. 휴일은 일정에 산입하지 않는다.

라. 과학적인 공정관리가 되도록 작성하여야 한다.

7. 설계설명서 등

가. 각 시설별로 설계에 따른 설명서를 작성한다.

나. 본 과업지시서에서 제시하는 기본설계에 관한 모든 사항에 대하여 종합적으로 각 공종별로 정리하여 작성한다.

다. 기타사항, 필요사항, 특기사항에 대하여 설명서를 작성한다.

라. 발주청 요구사항 등을 포함하여 작성한다.

8. 성과품 제출

가. 기본설계종합보고서 및 설명서 : 각 5부

나. 설계도면(A3 책자형. CD ROM ) : 각 5부

다. 개략공사비 내역서 : 각 5부

라. 개략적인 부하계산서 등 각종 계산서 : 각 5부

【실시설계】

1. 과업의 범위

실시설계는 기본설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계 도서를 작성하며, 이 도서는 실시설계 완료 전에 각종 협의, 심의 및 인‧허가 등 행정절차를 거쳐 최종 확정된다.

가. 설계설명서

나. 일반 및 특기시방서

다. 설계도면

라. 설계내역서(내역서, 일위대가표, 물량산출근거, 단가산출근거, 각종 계산근거등)

마. 각종 계산서 (구조계산서등)

바. 공 정 표

사. 실시설계 종합보고서

아. 기타 범어사에서 요구하는 사항

2. 설계도서 작성기준

가. 공통사항

1) 기본설계에서 결정된 각종 시설의 형식 및 기준을 재검토하여 보고 후 최종 확정안에 대하여 세부 실시설계 도서를 작성한다.

2) 성과품 납품 시 또는 그 후에라도 잘못된 사항이 발견되었을 경우에 이를 숙지하지 않은 책임은 용역수행자에게 있으며, 즉시 보완 수정하여야 한다.

3) 설계도서 작성

가) 설계도서 작성은 범어사가 지정하는 규격으로 한다.

나) 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명하며, 문자는 한글사용을 원칙으로 한다.

다) 주요자재는 KS 제품을 사용하고 KS 제품이 없을 경우에는 용역감독자의 별도 지시에 따라 설계한다.

라) 설계도면은 범례, 도면목록을 작성하고 도면의 일부분에 품명, 용량, 기타 사항을 표기한 일람표를 표기하여야 한다.

4) 각 설계도는 더 이상 세부설계가 없이 시공도가 될 수 있도록 최대한 상세히 표현되도록 하고 각 실의 실내장식은 그 시설내용과 함께 미적 감각을 도입하여 설계하고 특별한 사항 없으면 더 이상의 실내장식 검토가 되지 않도록 설계한다.

5) 각 설계도는 관련법규 및 범어사의 공사시행 과정을 참조하여 분야별로 구분 설계하여야 한다.

6) 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격작성준칙의 공사원가 계산방식에 의거 작성하되 적산프로그램(EXCEL)으로 구성하여 작성한다.

7) 공사비 적산은 정부표준품셈, 시중노임단가, 부산광역시 건설공사 설계지침서 등에 의거 산출하되 사전 조사하여 작성한다.

가) 본 공사에 소요되는 모든 자재는 각 품목, 품질 및 규격별 조사한다.

나) 자재단가는 조달청 발행 “가격정보”를 기준으로 하고 동 책자에 없는 단가는 대한건설협회 발행 “거래가격” 사단법인 한국물가협회 발행 “물가자료” 사단법인 한국물가정보 발행 “물가정보” 중 서로 비교하여  최저가를 적용하며, 상기 책자에 없을 때에는 시중 거래실례가격(3개업체 이상 견적서 첨부)을 기준으로 한다.

단, 재료 및 자재단가 운반비가 포함되지 않는 경우 구입 장소로부터 현장까지 운반비를 계상할 수 있다.

다) 지하굴착을 위한 가시설, 현장계측, 각종 시험(평판재하시험, 말뚝재하시험, 연약지반 개량 확인을 위한 시험)비를 계상하여야 한다.

라) 사용자재는 KS 제품 사용을 원칙으로 한다. 단, 국내에서 생산이 되지 않는 자재의 경우는 사용계획, 사용처 및 사유를 알리고 이와 대체할 수 있는 국내제품과 비교 검토하여 적용한다.

나. 건축분야

1) 건축법 및 건설산업기본법 기준

2) 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토해양부)

3) 콘크리트 구조기준(국토해양부)

4) 구조물 기초설계기준(국토해양부)

5) 건축공사 표준시방서(국토해양부)

6) 건축물의 하중기준 및 해설(대한건축학회)

7) 내진설계 규정(KBC2009, UBC, AISC, ACI 등)

8) 기타 본 과업에 적용되어야 할 관련 기준 등

3. 설계 설명서

가. 건축분야

1) 설계 설명서는 본 과업의 전체 순위를 정하여 아래와 같이 알아보기 쉽게  하여야 한다.

가) 개    요

나) 구조 및 면적

다) 부대시설

라) 기타 필요한 사항

2) 설계설명서에는 설계조건 적용 등 설계 특수사항 및 구조계획서 내용을 표기하여야 한다.

가) 구조재료의 성질 및 특성

나) 제반 하중조건에 대한 분석 및 적용 내용

다) 각 부 구조계획(골조평면, 층고 등) 및 구조성능(단열, 내화, 차음, 진동 장애 등)

라) 기초의 지내력 산출근거 및 지진에 대한 고려사항 등

3) 세부시설 설명서는 각 시설별로 한 장 단위로 시설개요, 면적, 규모, 층고,  일반 시설내용, 특수시설 내용 등 전반에 걸쳐 기술하고 그 실의 기능, 용도,  설치목적 등을 표기하여 실제 사용자에게 시설물 이용에 편리하도록 기준이  되는 근거가 되도록 작성한다.

4) 기타 세부도면 작성 및 분류는 발주청의 지시에 의한다.

4. 시 방 서

가. 일반시방서 : 환경 및 안전 관리대책을 비롯한 공사 관련 필요한 사항과 유의하여야 할 일반적인 사항을 명시

나. 특기시방서 : 일반시방에서 기술되지 않은 내용으로 공사 집행상 특별히 유의하여야 할 사항을 명시

다. 자재시방서 : 사용하고자 하는 기자재의 특성, 정격, 운용방법, 제작조건 및 기준 등을 명시

라. 공종․기기별 누락 없이 상세히 기록

마. 기타 발주청 요구 시방서

5. 설계도면

가. 설계도면은 A1크기로 설계함을 원칙으로 한다.

나. 건축설계의 도서는 KSA 0005 제도 통칙에 준하여 작성한다.

다. 과업시설물의 설계도서는 기관별, 공종별, 발주구분별로 편철하여 도서목차,  배치도, 구적도, 평면도, 단면도 등의 순서로 작성한다.

라. 도면 제작 중 중복이 있을 시는 단일화 할 수 있으며 동일 도면에 표시할 수 있다. 도면 규격과 설계도 축척이 맞지 않을 경우에는 일부수칙을 변경할 수 있다. 축척은 도면의 축소와 확대에 대응할 수 있도록 스케일자를 포함하도록 한다.

1) 건축법시행규칙 제4조 및 제6조 제1항 관련 [별표2]에서 규정하는 도면

2) 부산광역시 건설공사 설계지침서에 의한 각종도서

3) 향후 증축계획에 대한 설계도서□비고□란에 명기

4) 기타 공사시행에 필요한 도면(발주청의 구분발주가 예상되는 공종은 별도 작성 요함)

6. 각종 계산서 등

가. 본 과업의 구조 계산서 등 각 분야의 기술적 계산서는 관계 규정에 의거 관련  전문가가 작성하고, 반드시 작성자가 날인하여야 한다.

나. 건축, 토목분야

1) 수리 계산서

2) 배수시설 계산서

3) 구조 계산서(구조안전 및 내진설계 확인서 첨부)

4) 기   타(지질조서 보고서 등)

7. 설계 내역서

가. 내역서는 건축, 전시, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 관급자재로 각각 구분하여 작성하고 선문화교육불교회관 건립 사업에 필요한 모든 비용을 작성하여야 하며, 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격작성준칙의 공사원가계산 방식에 의거 작성한다.

나. 내역서 작성 시에는 공정관리와 원가관리가 용이하도록 작성한다.

다. 정부표준품셈, 정부노임단가, 부산광역시 건설공사 설계지침서 등에 의거 산출하되 아래와 같이 사전조사 및 판단을 하여 적산하여야 한다.

1) 재료 단가조사

가) 본 공사에 소요되는 모든 자재를 각 품목, 품질 및 규격별로 조사한다.

나) 단가는 조달청에서 고시하는 자료를 우선 적용하고 이에 누락된 품목은 시장조사를 하되 시중물가자료 책자 등과 직접 시장 조사된 2개 이상의 견적서 등에 의한다.

다) 공사자재 및 자재단가 결정은 거래실례가격에 기준 한다. 단, 재료 및 자재 단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

라) 사용자재는 국내 생산품 중 KS 제품 및 최고품 사용을 원칙으로 한다. 단, 국내에서 생산이 되지 않는 자재의 경우에는 사용계획, 사용처 및 사유를 명확히 밝히고 이에 대체할 수 있는 국내 제품과 비교 검토하여 발주청과 협의하여 적용한다.

라. 실적공사비 적용이 가능한 공종에 대하여는 관련 규정을 적용한다.

2) 수량산출

가) 수량 산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에 부합토록 적의 결정하여 적용한다.

나) 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 비교하여, 기계장비의 선택적 조합의 합리성과 경제성을 비교 채택하여 산정한다.

다) 사용단위는 C.G.S 단위로 하되 소수점 이하 2위까지 하고 끝수는 반올림한다.

라) 위의 모든 수량산출에 관한 것은 착오 또는 오차가 없도록 하여야 한다.

3) 주요자재

가) 주요자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량,  제작방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

나) KS 제품에 없는 제품을 사용할 때는 공사조건에 맞는 관련규격 및 시방서(외국 규격 등)등을 검토하여 사용토록 한다.

다) 주요자재는 회계예규 “시설공사계약일반조건 제10조 및 제17조의 규정”에 따라 운용 관리하는데 지장이 없도록 하고, 설계 도서를 작성하여야 한다.

라) 발주청이 공급한 설계자료와 기타사항은 설계용역 수행을 위하여만 사용하고 잉여분은 발주청의 지시에 따라 반납하여야 한다.

마) 발주청의 사정으로 수급의 원활을 위한 사전 물량파악이 있을 시는 즉시 물량 산출하여야 한다.

4) 일위대가표

정부표준품셈에 의거 작성하여야 하며, 이의사항이 있을 경우 용역감독자와 반드시 협의하여야 한다.

8. 공 정 표

가. 본 과업의 공사 공정표(PERT, CPM등)는 공사의 내용파악이 용이하도록 상세하게 작성한다.

나. 특기시방서에 명시되어진 공종 중 범어사가 지정하는 주요공정은 별도로 공정표를 작성한다.

9. 실시설계 종합보고서

가. 본 종합보고서는 기본설계에서 실시설계 완료까지의 모든 과정에 걸쳐 논리적, 사실적, 기술적으로 작성되어야 하고, 구조물의 특성과 용도의 개념을 명확하게 기술해야 하며, 관리운영에 관한 사항과 각실 면적 및 기능과 시설개요 등 각 주요 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모하게 해야 한다.

나. 보고서 내용은 공사에 필요한 종합보고서로 다음 사항을 수록하여야 한다.

1) 과업의 목적

2) 과업의 범위

3) 과업의 내용

4) 사전 조사내용 요약

5) 설계기준

6) 구조물 설계안별 검토내용

7) 세부설계내용 (공종별 비교검토 내역포함)

8) 주요자재 및 수급계획

9) 시공계획

10) 도면첨부

11) 기타 참고자료

12) 기타 발주청의 요구사항

10. 성과품 제출

설계도면 및 시방서는 아래 제출서류 이외에 조달청에서 선정된 CD - ROM 저장프로그램으로 저장된 CD - ROM으로 제출하여야 하며, 내역서는 아래 제출서류 이외에 조달청에서 시설공사 응용프로그램으로 선정된 프로그램으로 작성된 PC용 디스켓을 제출하여야 한다.

가. 설계용역 보고서 10부.

나. 설계도서 원도 및 원고일체

다. 설계도서

1) 설계설명서 10부

2) 분야별 설계도면 A3 10부 (책자형)

3) 분야별 시방서 (일반, 특기, 자재시방서) 10부

4) 분야별 수량산출 조서 10부

5) 분야별 단가산출 조서 10부

6) 분야별 설계내역서 10부

7) 설계도서는 각 분야별로 용역감독자 지시에 따라 작성 제출한다.

라. 각종 계산서 : (구조계산서등) 5부.

마. 조감도 : 조감도(60×90cm내외) 1점, 칼라사진 10점(5인치× 8인치 필름 또는 CD-ROM포함)

바. 기  타

1) 제품 안내서, 취급설명서 등

2) 견적서

3) 참고자료 등

사. 기타 발주청에서 요구하는 성과품과 설계내역서중 단가 미기재 내역서의 수량은 별도 용역감독자의 지시에 의한다.

제3장 기계 소방 분야

【일반사항】

1. 과업 일반사항

가. 설계용역업자의 성실 등의 의무

1) 설계용역자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며, 건축물 및 관련시설의 기능 및 구조상 지장이 없도록 설계하고 본과업의 질적 향상에 노력하여야 한다.

2) 계약 체결 후 7일 이내에 과업을 착수하여야 하며, 착수하기 전에 착수계․사업수행계획표․용역수행자 명단 및 이력서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

3) 과업 착수 시 또는 과업수행 중 용역감독자가 담당 기술용역 설계자가 과업수행에 부적당 하다고 판단될 경우 교체 요청할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

나. 업무수행

1) 관련부서 협의충실

설계용역자는 본 과업을 수행함에 있어 관련부서와 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토 반영하여야 한다.

2) 설계자료 조사성실

설계용역자는 기본 및 실시설계 등을 진행함에 있어 충분한 자료를 수집하여 설계의 질을 높여야 하며, 안전하고 경제적이며 최신시설이 되도록 노력하여야 한다.

3) 회의참석 등

설계용역자는 본 과업과 관련 발주청의 요구가 있을시 성실히 설명하고, 각 분야별 기술사항에 대하여는 책임기술자가 질의답변토록 한다.

4) 기술자문

설계용역자는 본 과업과 관련 발주청의 요구가 있을시 전문기관(대학 등)에 기술검토 의뢰 등 적극 조치하여야 한다.

5) 보고 등 의무성실

가) 설계용역자는 아래 각 사항에 대하여 일반적인 사항 또는 당초 계획과 변경이 있을 경우 사전 보고한 후 검토된 자료에 의거 과업을 진행한다.

- 설계자료 또는 통계 조사연구 적용 및 개선 등에 관한 사항

- 새로운 기술도입에 관한 사항

- 공사비, 공사기간 등

- 설계용역과 관련된 홍보활동 및 간행물 발간 등

- 기타 지시받은 사항

나) 과업의 진척 사항을 보고해야 하며, 기본설계 및 실시설계 보고 등 용역감독자가 필요하다고 지시하는 경우 제반 추진내용을 책임기술사가 직접 보고해야 한다.

6) 자료제출 성실

설계용역자는 과업수행 중 심의회 등을 위하여 자료제출 요구가 있을시 이에 응하여야 하며, 자료제출 등으로 인한 비용은 용역자가 부담한다.

7) 용역자는 하도급 용역(기계․소방설비 등)을 할 경우 관련분야 엔지니어링활동주체 또는 기술사이상의 면허가 있는 전문설계 용역업자체에 하도급을 하여야 하며, 발주청에 하도급 신고를 하여 승인을 득하여야 한다.

8) 설계자는 설계 전 반드시 현장 확인하여 각종 인입위치, 냉난방부하 분석 등 현장 여건 등을 충분히 검토하여 설계에 반영한다.

다. 관계사항 숙지의무

1) 설계용역자는 본 과업지시서 내용과 본 용역시행 관련 전반적 사안을 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 아니하여 발생되는 사안에 대하여는 용역자가 책임을 진다.

2) 본 과업지시서에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 발주청과 협의하여야 하며, 이견이 있을 경우 감독자의 의견에 따른다.

3) 기타 경미한 사항은 협의하여 시행하며, 이에 소요 되는 비용은 용역자가 부담한다.

4) 본 과업지시서는 과업수행을 위한 사항을 규정하였는바 이에 규정되지 아니한 사항은 관련법규의 규정 및 시험규정, 한국공업규격 및 관련규정에 따라 용역감독자와 협의하여 수행한다.

5) 본 과업을 수행함에 있어 수급인은 제반여건 조치를 하여야 하며 본 과업으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급인이 손실 보상을 하여야 한다.

6) 수급인은 각종 행정 절차상의 승인, 협의, 인.허가를 완료할 수 있도록 제반 조치를 취하여야 하고, 필요시 관계기관의 협의에 따른 필요한 보완 관련 자료를 작성 제출하여야 하며, 납품 후에라도 행정절차 이행이 완료되어야 본 용역 과업이 완료된 것으로 본다.

7) 용역감독자이 과업 수행중 수급인의 고용인이 과업수행에 부적당하다고 인정할 때는 즉시 교체를 명할 수 있다.

8) 설계도서 작성은 건설교통부 고시 제2003-11호(2003.01.24)의 설계도서 작성 기준에 의거 작성하여야 하며, 특히 기계설비 도면상에 설계자, 제도자, 검수자, 확인자 등의 설계도서 작성관련자가 실명 날인하여야 한다.

9) 건축평면도 작성지연으로 인한 기계설비설계 용역기간 축소가 되지 않도록 하여야 하며 이로 인한 책임은 계약자에게 있다. 또한 해당분야 용역감독자과 충분히 상의하여야 한다.

10) 본 용역설계에 의하여 공사 시행중 주요사항이 누락되어 설계변경하거나, 피해가 발생 시는 설계용역자가 피해보상 또는 변경설계를 이행하여야 하며 이에 따른 대가를 요구할 수 없다

【기본설계】

1. 관계법규 조사

가. 소방법령 및 관련 제반법규

나. 오수․분뇨 및 축산폐수에 관한 제반법규 (오수정화시설 또는 분뇨정화조)

다. 위험물취급 관련법규

라. 도시가스사업법령 및 관련 제반법규

마. 주차장법령 및 관련 제반법규

바. 에너지이용 합리화법령 및 관련 제반법규

사. 집단에너지사업법 및 관련 제반법규

아. 장애인복지법 및 관련 제반법규

자. 한국공업규격

차. 건축물의설비기준등에관한규칙

카. 건축물의에너지절약설계기준 (건교부고시 제2003-314호)

타. 대체에너지개발및이용․보급촉진법

2. 기본설계 용역수행

다음 소요시설에 대하여 검토하고 설계에 반영한다.

가. 기계 설비

1) 냉․난방 공조설비

가) 에너지절약형, 자동제어 기능 검토설계

나) 각 실별 부하조건에 따라 공조방식 검토설계

2) 항온항습 설비

각 주요 실별 (전산실 등) 항온항습 시설 필요시 검토설계

3) 위생설비

가) 소변기 전자감응식 적용 검토설계

나) 재질, 규격 선정 시 부식, 수두 감안 설계

4) 환기설비

가) 사무실, 기계실, 다목적실, 멀티미디어실, 영사실 등 실별

환기방법 검토설계

나) 많은 환기에너지가 소요되는 실의 경우 환기방법을 에너지

절약대책과 함께 검토설계

다) 화장실 환기 및 살균시스템 검토설계

라) 자연환기 시스템과 강제환기 시스템 등의 환기설비 검토설계

마) 자동제어 방식으로 현장 및 중앙제어 시스템과의 효율적 연계 검토설계

5) 자동제어 및 중앙감시설비

각 그룹별 자동제어 및 현장제어 시스템과 중앙제어실이 연계된 효율적인 관리 시스템을 구축하고, 기계, 전기 등을 통합 감시 제어가 가능하도록 검토설계

6) 무대설비

시청각교육장, 멀티미디어실 등 무대시설 설치 여부에 따른 검토설계

7) 방음, 방진설비

각 장비 및 배관 등에 대한 방음, 방진 검토설계

8) 급․배수 설비

가) 각 실별 급․배수 설비, 옥외 급․배수 설비의 검토설계

나) 급수시설에 따른 도로굴착 및 분담금사항 등 관할수도사업소

와 사전협의 검토설계

9) 도시가스 설비

(주)부산도시가스사와 사전 협의 및 관련법규에 적법하게 검토설계

10) 주방설비

적정 용량 분석 및 안전기기 검토설계

11) TAB 용역

설비 규모 및 건축 연면적을 감안하여 용역시행 필요성 여부

검토 설계

나. 기타 설계 시 유의사항

1) 국내 타도시의 유사 건축물에 적용되어 있는 각종 기계설비 방식을 충분히 검토, 분석하여 미비점, 문제점을 보완할 수 있는 방식을 선정하여야 한다.

2) 건축, 토목, 전기등 타 공사(공정)와 연관되는 부분을 면밀히 검토, 설계반영 하여 기계설비의 원활한 기능을 유지하도록 설계하고 차후 운영자의 입장에서 설계하여 각종 하자 등에 능동적으로 대처할 수 있도록 한다.

3) 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적방식을 검토․반영토록 하고 개략적이라도 방식을 제시하고 정량적으로 제시한다.

- 냉․난방설비 열원검토에 있어 사업예상 지역의 특징을 고려하고, 추가 대체에너지 방안을 상호 비교 검토하여 검토서 제출(냉난방설비와 대체에너지의 연계시스템 검토서 제출)

4) 초기 투자비, 운전경비, 유지관리비 및 투자효과를 기대할 수 있는 측면을 고려하여 경제적인 설비방식을 채택한다.(LCC검토서제출)

5) 최신기술 적용으로 준공 후 기술 환경의 발전에 따른 설비방식의 상대적 낙후성을 방지하고 차후 설비의 유지보수 및 설비방식의 교체가 용이하도록 설계한다.

6) 노출되는 설비는 건축 미관과 조화가 되도록 검토하고, 내부의 설비는 내장공사 및 실내인테리어 공사를 검토설계

7) 건축. 실내인테리어. 전기등 타 공사 및 기존시설과의 연계(누락, 중복, 간섭) 검토설계 및 기계분야, 전기분야의 명확한 구분을 반드시 할 수 있도록 설계한다.

8) 기계실 면적 및 피트층 등은 에너지이용합리화법등 각종 법에 따라 유지, 하자보수 등 관리가 용이할 수 있도록 적절한 공간을 확보하여야 하며, 기본설계 시 건축설계자는 기계 감독자와 협의하여 충분한 기계실 공간을 확보한다.

3. 기계설비 분야 설계설명서 작성

가. 본 과업지시서에서 제시하는 기본설계에 관한 모든 사항을 종합적으로 정리하여 각 공종별로 작성한다.

나. 설계조건, 각종 설비별 계획 개요, 기자재시방 개요 작성

다. 개략적인 부하 및 장비용량 계산서 산출 작성

라. 개략공사비 산출 작성

마. 예정 공정표

바. 기타 발주처 요구사항 등을 포함하여 작성한다.

4. 기본설계 성과품 제출

가. 기본설계 종합보고서                          5부

나. 설계설명서                                    5부

다. 기본설계 도면(계통도,평면도 등)               5부

【실시설계】

1. 실시설계도서 작성기준

가. 기계설비분야

1) 공기조화설비

각 실의 환기설비를 검토하여 에너지 절약형과 자동제어 기기의 선정 등 충분한 검토설계

2) 냉․난방설비

부식에 의한 배관재질 및 응축수처리 등을 고려하여 설계(에너지절약 방안으로 활용)

3) 열원설비

사용연료의 저장시설 및 폐열에 대한 회수장치에 대한 검토설계(전열 교환기 등)

4) 위생설비

가) 급수공급 방식에서 수압 및 각 실별 관말수압에 대한 충분한

검토(수두손실)와 오․배수설비(배수구와 연결문제) 검토설계

나) 급수방식은 각 층에서 적정한 급수 압이 유지될 수 있는 시스템(수도직결식, 급수펌프방식 등)으로 설계

다) 급수관 인입에 따른 도로굴착 및 분담금사항 등 관할수도사업소와 사전협의 검토설계

5) 자동제어설비

가) IBS에 대한 각 그룹(실)별 제어방식을 검토설계

나) 현장제어 시스템과 중앙제어 시스템의 연계

다) 기계, 전기 등 통합 컨트롤 방식, 중앙감시 제어방식 검토설계

6) 도시가스설비

설계유량 및 관경의 적정여부 검토설계

[반드시 가스 전문업체 사전 협의 후 설계 및 관계기관(가스안전공사, 가스공급사 등) 검토의견서 첨부하여 제출]

7) 방음․방진 및 내진설비

각 설비의 방음. 방진 및 내진에 대한 대책 검토설계

8) 기타 사항

가) 오수정화시설 등을 설치할 경우 환경부고시에 따른 오수량, 수질, 처리 방식 검토설계

나) 모든 설비의 소재 및 규격을 자세히 명시하고 내구년도를 표시한다.

다) 각종설비는 유지관리가 용이하도록 설계 및 배치하며, 설비유지 방안에 대해서도 명시할 것

라) 소방분야 북부소방서 협의 후 소방시설을 보안한 후 용역감독자에게 협의할 것

2. 설계 설명서

가. 기계설비, 소방설비 개요

나. 선정내용

다. 용역의 특수성

라. 공사개요

마. 주요 설비 내용

바. 주요 유틸리티 설비 : 전력, 물, 냉동, 펌프, 공기조화, 증기, 압축공기. 배선, 배관, 기타설비

사. 에너지절감 및 유지관리에 관한사항

아. 세부 시공계획

자. 세부 공정계획

차. 기타 필요한 사항

3. 시 방 서

가. 일반시방서

1) 기계분야는 건축기계설비 공사 표준시방서에 준하여 상세히 기술

나. 특기시방서

1) 주요장비 제작시방, 설치시방, 주요자재 재질 및 규격등 주의를 요하는 사항

2) 공종별, 기기별로 누락 없이 상세히 기록

4. 설계도면

가. 일반사항

1) 범례, 도면목록, 기계기구 일람표(수량, 용량, 사양, 기타사항 포함)

2) 기계소방과 전기소방 구분 작성

나. 배치도

기본 설계 시 표기된 사항을 구체화한 내용

다. 계통도

주요 기계장비 및 유틸리티 설비의 자동제어시스템, 공기조화, 급․배수(급탕포함), 소방, 기타 설비의 세부 계통도

라. 평면도

1) 각종 설비 평면도 및 확대평면도(급배수시설, 공조실, 냉난방설비, 위생시설, 도시가스시설, 소방시설, 자동제어시설, 등)

2) 기계실 도면은 전체 배관도 작성 후 급수, 급탕, 보급수, 냉․온수, 냉각수 등으로 각 배관별 분리하여 도면 작성하고, 열원 흐름도를 냉열원 및 온열원으로 구분하여 도면 작성한다.

마. 단면도 및 상세 단면도

바. 옥외 공동구

옥외 공동구 관리 및 각종 설비 평면도. 단면도 (확대도면) 포함

사. 각 장비별 상세도 및 연결 상세도

1) 냉동기, 냉각탑, 펌프, 공조기, 휀, 보일러, 해더 등 상세도 및 배관 연결 상세도

2) 기타 발주청 요구 각종 상세도

3) 설계자는 장비 배치 시 감독관과 협의하여야 한다.

아. 기타 필요한 사항

제작품 카탈로그, 조작반 사양 및 기타 참고자료 등 발주청 요구사항

자. 설계도서는 건설교통부 고시 제2003-11호(2003.11.24)의 설계도서 작성기준에 의거해서 작성토록 하고, 특히 설계도면 상에는 도면작성 관계자(설계자, 제도자, 검수자, 확인자 등)가 실명 날인 후 납품되어야 한다.

5. 각종 부하계산서 등

가. 각 장비별 기계설비 용량 및 냉난방 부하계산서

나. 가스 설비 계산서(월사용예정량 산출계산서, 관경 산출계산서 등)

다. 소화설비 계산서

라. 연간 유지비, 운전비 산출서 등 발주청 별도 요구 시 제출

마. 관련 참고서적 요구 시 제출

바. 설계 계산식의 안전계수 사용 시 근거를 밝힐 것

사. 계산식의 인용 시 출처를 밝힐 것

아. 에너지 절약 계획서 제출

6. 설계 내역서

가. 공종별 세부 내역서(공종내역서 및 단가산출 내역서 별도 작성제출)

나. 수량산출서

1) 건설교통부 제정 건축기계설비공사 표준시방서에 의거 설계한다.

2) 수량산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에 부합토록 결정하여 적용하며, 각 부분별 물량산출시 과대 및 과소 물량이 되지 않도록 설계한다.

3) 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 상세 검토하여 수량 산출한다.

4) 산출부위 장소 및 위치 상세를 명확히 하여 감독, 시공사, 감리 등 기계설비분야 관련자가 확인할 수 있도록 상세하게 산출하여야 한다. (수량산출 상세도면 필요시별도 제출)

5) 기계설비 표준품셈은 2013년도를 기준으로 작성한다.

6) 시중노임단가, 물가지등 각종 산출근거를 첨부하여 제출하여야 한다.

다. 단가산출서

1) 본 공사에 소요되는 기계설비 자재는 각 품목, 품질 및 규격별로 상세히 조사한다.

2) 단가는 조달청에서 고시하는 자료를 우선으로 적용하고 이에 누락된 품목은 시중조사를 하되, 실시설계납품 2개월 이내의 시중 물가지 2개 이상 기재되어 있는 내용을 조사하여 제출하여야 한다.

3) 물가자료지에 없는 품목에 대해서는 2군데 이상의 견적서 참고하여 제출하여야 한다. (견적서는 별도 설계도서 납품 시 제출하여야 한다.)

4) 사용자재는 국내 생산품 중 KS제품을 적용하고 KS제품이 없을시 시중 최상품 사용을 원칙으로 한다.

단, 국내에서 사용되지 않는 자재 및 생산되지 않는 자재를 사용 시에는 사용계획, 사용처 및 사유를 명확히 밝히고 발주청에 별도 보고하여 적용한다.

라. 일위대가표

1) 기계공사 표준품셈을 우선 적용하되, 이에 없는 공종은 대한설비공사협회 발행 설비공사단위당 가격표에 의거 작성하여야 하며 현실에 부합하는 일위대가표를 작성하여야 한다. 또한 일위대가표상 이의사항이 있을시 감독관과 반드시 협의하여야 한다.

7. 실시설계 종합보고서

가. 종합보고서에는 기본설계에서 실시설계에 이르기까지의 모든 과정을 논리적, 사실적, 기술적으로 작성하여야 하며, 국내․외의 친환경 에너지 초절약형 건축물에 적용되어 있는 기계설비를 비교 분석하여, 기계설비 특성과 용도의 개념을 명확히 기술하여야 하며, 사용자 편의를 도모할 수 있도록 상세하게 기술한다.

나. 보고서 내용은 공사수행에 이용될 수 있도록 모든 자료가 포함된 종합보고서이어야 되며 다음사항을 반드시 포함하여야 한다.

1) 과업의 목적 및 범위

2) 과업의 내용

3) 사전 조사내용(현장조사) 및 타 시도의 유사 공공도서관 비교검토내용 및 장단점, 운영 시 개선해야 할 방향

4) 세부설계내용

5) 주요자재 및 수급계획

6) 시공계획

7) 관련법규 상세조항

8) 기타 발주청의 요구사항

8. 성과품 제출

가. 기계설비 분야 설계도서 제출목록

1) 기계설비 설계도서는 건축 설계도서와 함께 제출한다.

가) 도면 : A3 반접이형 10부

나) 내역서 : 공종내역 (A4) 5부, 설계내역서 (A4) 10부

다) 설계설명서, 수량산출서, 일위대가표, 내역서, 단가대비표

(견적서 포함), 실시설계종합보고서, 시방서 등 각 5부

라) 각종부하계산서 : 냉난방부하계산서, 가스설비계산서,

소화설비계산서 등

마) 기타 발주청처의 요구서류

2) 기계설비, 소방 설계도면, 내역서, 시방서, 일위대가표 등을 CD롬 드라이브에 담아 별도 기계담당부서에 2장 제출할 수 있도록 하여야 한다.

가) 도면 : AUTOCAD 파일로 작성(CD제출시 한글 폰트 파일 첨부)

나) 내역서, 단가대비표, 일위대가표 : EXCEL로 작성

다) 시방서 : 한글로 작성

※ 기계분야의 각종계산서 (적용공식 채택근거 계산서 등)는 빠짐없이 정확하게 계산하여야 하며 근거자료는 필히 명시하여야 한다.

나. 기 타

1) 제품의 카탈로그 취급설명서등

2) 참고자료 등

제4장 전기 소방 분야

Ⅰ. 과업지시서

1. 과업 일반 사항

가. 설계용역자의 성실 등 의무

1) 설계용역자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며, 건축물 관련시설은 평생학습관의 목적에 부합되게 미관, 기능 및 구조상 지장이 없도록 설계하고 본 과업의 질적 향상을 위하여 노력하여야 한다.

나. 보안 등

1) 설계용역자는 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 등 기타자료 및 이에 의하여 얻은 지식을 타인(개인 또는 특정 단체 등)의 이익을 위하여 제공할 수 없다.

2) 설계 용역자는 아래와 같이 보안업무를 수행하여야 한다.

- 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로   유출시켜서는 안 된다.

- 과업수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항    불이행으로 발생되는 모든 책임은 설계용역자가 진다.

다. 업무수행

1) 관련부서 협의 충실 : 설계용역자는 본 과업을 수행함에 있어 관련 부서와 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토 반영하여야 한다.

2) 설계자료 조사 성실 : 설계용역자는 설계 등을 진행함에 있어   충분한 자료를 수집하여 설계의 질을 높여야 하며, 안전하고 경제적이며, 최신시설이 되도록 노력하여야 한다.

3) 회의참석 등 : 설계용역자는 본 과업과 관련된 각종 회의에 참석  설명하여야 한다.

4) 보고 등 의무성실

- 설계용역자는 아래 사항에 대하여 사전보고 후, 검토된 자료에  의거 과업을 진행한다.

∙ 설계용역 능력향상을 위한 기본계획 수립 및 제도개선에 관한 사항

∙ 기술인력 구성에 관한 사항

∙ 공사비, 공사기간 등

∙ 기타 범어사로부터 지시받은 사항

- 과업 진척보고는 감독을 경유하여 서면으로 보고해야 하며 기타  감독원이 필요하다고 인정할 경우 관련기관과 협의사항 및 추진  내용을 보고해야 한다.

5) 자료제출의 성실 : 설계용역자는 과업수행 중 보고회 등을 위하여  자료제출 요구가 있을 경우 관련 자료를 제출하여야 한다.

(자료제출 등에 따른 비용은 용역자 부담)

라. 설계변경 및 조정

1) 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가  있다고 인정할 때에는 설계용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며,  설계용역자는 범어사의 방침에 따라야 한다. 이 때 과업범위의   증감이 발생할 경우에는 당해 계약금액을 정산하되 계약자는 추가  금액을 요구할 수 있다.

2) 설계 또는 공사 진행 중 범어사에서 필요하다고 인정되어 설계변경을  요구 할 때에는 설계자는 상당한 이유 없이 이를 거부할 수 없으며  지체 없이 이를 이행하여야 한다.

마. 설계의 하자 책임

1) 용역설계자는 제출한 설계도서상의 하자로 인하여 구비 손실 또는  인명피해, 기타 공사 진행상의 지장을 초래하였을 경우에는   손해배상 등 이에 대한 책임을 범어사에 져야 한다.

바. 용역기간 연장

다음과 같이 부득이한 경우에는 범어사와 협의하여 용역기간을 연장할 수 있다.

1) 천재지변, 일기불순 등으로 예측치 못한 용역불가 일수가 계속될 때

2) 조사물량의 증가 등으로 용역기간 연장이 불가피 할 때

3) 발주청의 부득이한 사정으로 용역중지 또는 연기의 필요가 있을 때

4) 기타 현장의 부득이한 사정으로 연기가 불가피하다고 인정될 때

사. 기타 관련 사항

1) 설계용역자는 본 과업지시서의 내용과 본 용역시행 관련 전반적인 사안을 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 않아서 발생되는 사안에 대하여는 용역자가 책임을 진다.

2) 감독원이 과업수행 중 하도급자나 고용인이 과업수행에 부적격하다고  인정될 때에는 즉시 교체를 요구할 수 있으며, 용역자는 이에 따라야 한다.

3) 본 과업지시서는 과업수행을 위한 사항을 규정하였는바, 이에   규정되지 않은 사항은 건설공사 조사 및 시험규정, 한국공업규격 및 관련 규정에 따라 수행하여야 한다.

4) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정하는  중요한 사항은 필요한 서류를 작성 제출하여야 하며, 기타 경미한 사항은 감독원이 별도 추가사업이 필요하다고 인정할 시, 설계용역자는 이에 따르며 이에 소요되는 경미한 비용을 부담한다.

5) 본 과업 수행 상 범어사의 사정에 의하여 일부 변경이 있을 시에는 범어사의 방침에 따라야 한다.

6) 본 과업을 수행함에 있어 용역자는 제반조치를 취하여야 하며,  본 과업으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 용역자는 손실보상을 하여야 한다.

7) 용역자는 건축협의 등 각종 행정절차상의 승인, 협의, 인․허가를  완료할 수 있도록 제반 조치를 취하여야 하고, 납품 후에라도  관계기관과의 협의에 따른 필요한 보완 자료를 작성 제출하여야 한다.

Ⅱ. 설계설명서

1. 설계도서 작성기준

가. 전기·소방 관련제반 법규 및 규정 등에 적합하여야 한다.

나. 설계용역자는 과업내용을 숙지하여 본 과업 내용이 적합하도록 하여야 하며, 성과품 납품 시 또는 그 후에라도 잘못된 사항이 있을 때에 이를 숙지하지 않은 책임은 설계용역자에게 있으며, 즉시 수정 보완하여야 한다.

2. 설계설명서

가. 설계도서 작성

1) 설계도서 작성은 범어사가 지정하는 규격으로 한다.

2) 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명하며, 문자는 한글사용을 원칙으로 한다.

3) 설계도서의 작성은 원고와 원도를 작성하여 감독원의 검사를 받은 후  인쇄하여야 한다.

4) 설계도면 작성을 위한 제도는 K.S.F/1001 제도통칙에 준한다.

5) 평면도는 각 지하매설물, 지상구조물 등에 대한 상호연관성을 고려하여 종합도(축적 1/200～1/600)를 작성하며, 축적(1/100～ 1/200) 내외인 세부평면도를 작성하되 각종 도면여백에는 현장에서 시공이 용이하도록 시공순서 및 주의사항 등을 표시하여야 한다.

나. 사용자재 조서

1) 주요자재는 K.S 제품을 사용하고, K.S 제품이 없을 때는 감독원의  별도 지시에 따라 설계한다.

3. 시방서 및 설계도면

가. 설계도면

1) 범례, 도면 목록을 작성하고, 도면의 일부분에 품명, 수량, 용량, 사양, 기타사항을 표기한 일람표를 표기하여야 하며, 도면의 내용은   다음과 같다.

가) 배치도 : 기본설계의 구체화한 내용

나) 계통도 : 각 설비별 세부계통도

다) 평면도 : 각 설비 평면도, 기구 및 주요설비 확대평면도

라) 기계기구 및 설치상세도

마) 시방서

- 일반시방서 : 공사관련 필요한 사항 및 공사시방

- 특별시방서 : 주요장비 제작, 설치, 재질 및 규격 등 주의를  요하는 사항

나. 설계내역서

1) 공사설명서

2) 공사원가계산서

3) 공종별 세부내역서

4) 수량(인공)산출서

5) 단가산출서

6) 일위대가표

7) 기타(견적서, 제품 안내서, 취급설명서 등)

4. 실시설계 수행

가. 실시설계 수행

1) 동력 및 조명의 전력간선 설비

가) 전력선 포설방식 및 옥내관로 구분 등

나) 사용전선의 허용전류 및 전압강하 계산에 의한 선종 규격, 접지선 결정

다) 경로배선 표설시 전선관을 이용, 허용전류 감소계수를 적용하여  전선 굵기 선정

라) 전선과 전선관은 시설 증가 대비하여 여유 있게 설계

마) 공사 시 동력전선의 식별이 가능하도록 표기 설계

바) 기타 전원공급이 요구되는 시설물의 전원검토 설계

2) 동력전원 및 부하설비

가) 전등, 동력분전반은 분리하여 설계

나) 동력전원 및 부하설비

- 설비부하용량을 충분히 숙지하여 이에 맞게 설계(차단기, 전자  개폐기, 열동계전기, 용량 등)

- 냉․난방설비, 환기, 급배수, 오수정화 등 설비부하 및 기타  전원설비 일체

3) 조명 및 전열설비

가) 적정 조도계산에 의한 각 실별 등수, 등종 결정(고효율기기 사용) 및 실별 내용물과 간격 유지

나) 각 층별, 분기회로별 총 부하용량 계산(최대한 자연광을 이용하여 설계)

다) 적당한 밝기 및 연색이 우수한 조명설계

라) 빛의 양적, 질적 변화가 적은 조명방식 검토

4) 소방분야

가) 전기설비 기술기준 및 소방설비 기술기준 등에 적합한 배선설계

나) 소방설비 규격, 수량, 취부위치 등은 용도와 면적에 적정하게 설계

다) 화재발생시 피해를 최소화 할 수 있도록 하고, 소방법령에 적합한 방재시설 설계(반드시 관할 소방기관 사전협의)

5. 설계내역서

가. 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격작성준칙의 공사원가  계산방식에 의거, 작성하되 전산프로그램으로 구성하여 작성한다.

나. 공사비 적산은 정부표준품셈, 시중노임단가(납품일 기준), 부산광역시 건설공사 설계지침서 등에 의거, 산출하되 사전 조사하여 작성한다.

다. 내역서 비고란에 적용품셈 대호 표기 또는 사본 첨부

1) 재료단가 조사

가) 본 공사에 소요되는 모든 자재는 각 품목, 품질 및 규격별로  조사한다.

나) 자재단가는 조달청 발행 “가격정보”를 기준으로 하고, 동책자에  없는 단가는 대한건설협회 발행 “거래가격”, 사단법인 한국물  가협회 발행 “물가자료”, 사단법인 한국물가정비 발행 “물가  정보” 중 서로 비교하여 최저가를 적용하며, 상기 책자에 없을  시에는 시중거래 실례가격(2개업체 이상 견전서 첨부)을 기준한다.

다) 사용자재는 국내 생산품 중 K.S제품 중 최고품 사용을 원칙으로 한다. 단, 국내에서 생산이 되지 않는 자재의 경우 사용계획, 사용처 및 사유를 알리고, 이와 대처할 수 있는 국내제품과 비교 검토하여 적용한다.

2) 수량산출

가) 수량산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에  부합되도록 적의 결정하여 적용한다.

나) 공사규모, 공기 및 현장조건 등을 비교 검토하고, 기계장비의 선택적 조합의 합리성과 경제성을 비교하여 경제적이고, 합리적인 공법을 채택하여 적정 산정한다.

다) 사용단위는 C.G.S단위로 하되 소수점이하 1위까지 하고, 끝수는 4사5입 한다.

라) 위의 모든 수량산출에 관한 것은 착오가 없도록 하여야 한다.

3) 주요자재

가) 주요자재 구입에 따른 시방서를 작성하고, 그 자재의 기능,  특성, 용량, 제작방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

나) K.S에 없는 제품사용 시 공사조건에 맞는 관련 규격 및 시방서  (외국규격 등) 등을 검토하여 사용토록 한다.

다) 주요자재는 회계예규 “시설공사 계약일반조건” 제10조 및  제17조의 규정에 따라 운영 관리하는데 지장이 없도록 설계   도서를 작성하여야 한다.

라) 범어사가 공급한 설계자료와 기타 사항은 설계용역 수행을 위하여만 사용하고, 잉여분은 범어사의 지시에 따라 반납하여야 한다.

마) 범어사의 사정으로 수급의 원활을 위한 사전물량 파악이 있을 시 즉시 산출하여야 한다.

4) 산업재해보상보험 요율

노동부에서 고시한 보험요율에 따른다.

5) 안전관리비 요율

노동부 고시에 의한 건설교통부 표준안전관리비 산정기준에 따른다.

6) 공정표

가) 본 과업의 공사공정표는 공사의 내용파악이 용이하도록 작성한다.

나) 특기시방서에 명시된 공종 중 범어사가 지정하는 주요공종은 별도로 공정표를 작성한다.

7) 실시설계 종합보고서

가) 본 종합보고서는 기본설계에서 실시설계 완료까지의 모든 과정에 걸쳐 논리적, 사실적, 기술적으로 작성되어야 하고, 구조물의 특성과 용도의 개념을 명확하게 기술해야 하며, 관리운영에 관한 사항과 각실 면적 및 기능과 시설개요 등 각 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모해야 한다.

나) 보고서 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서이어야 하며, 다음 사항을 상세히 수록하여야 한다.

- 과업의 목적, 과업의 범위, 과업의 내용 등

- 사전조서 내용파악

- 설계기준

- 구조물 설계안별 검토내용

- 주요자재 및 수급계획

- 시공계획

- 기타 범어사의 요구사항

7. 성과품 제출

가. 용역자는 아래 성과품 및 수량을 납품하여야 한다.

나. 설계도면 및 내역서, 시방서는 아래 제출서류 이외에 조달청에서

선정된 전산프로그램으로 저장된 CD을 제출하여야 한다.

1) 설계도서 일체가 수록된 CD - 10부

2) 설계도서 - 10부

가) 설계설명서

가) 시방서

가) 공사비 내역서

가) 수량산출조서

가) 단가산출조서

가) 각 설비별 부하, 용량, 규격 설계계산서 (근거자료 포함)

가) 설계도면 A4(책자형)

가) 기타 견적서, 제품 안내서 및 취급설명서 등

가) 각종 협의사항 자료 일체

제5장 정보 통신 분야

Ⅰ. 공통사항

1. 과업의명칭

본 과업은 「선문화교육불교회관 건립공사」중 정보통신분야를 규정한다.

2. 목적

정보통신시설을 구축하여 시설의 효율적 운영관리와 지역 주민의 편의 등 최상의 정보통신 서비스를 제공하기 위한 설계 도서를 작성하는데 그 목적이 있다.

3. 설계방향

가. 각 설비는 범어사의 요구 및 경제성을 감안하여 설계하되 외관이 미려하고 기술 기준에 적합하게 검토 설계

나. 정보통신, 방송․음향분야 등 유기적으로 통합하여 경제성, 효율성, 기능성을 추구한  첨단 정보통신 기반시설 구축

다. 초기 투자 및 유지관리를 감안한 경제성이 있는 건물이 되도록 설계하고 선진기술 사례조사, 분석하여 반영될 수 있도록 하여야 한다.

라. 국제적으로 표준화된 제품을 선정하여 전자, 정보, 통신장비 기술의 급변화에 따른 기기의 도입, 확장, 교체 등에 호환성 및 유연성이 있어야 한다.

마. 각종 기기규격 선정 시 장․단점을 비교 검토하여 설계한다.

바. 각종 장비의 단독전원 및 비상전원장치 공급 방법을 검토하여야 한다.

Ⅱ. 실시설계

1. 과업의 범위

기본설계에서 검토되었던 전반적 사항을 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 표기한 설계도서로 작성하는 것을 말하며, 다음과 같은 내용이 수록되어야 한다.

가. 설계설명서

나. 일반 및 특기시방서

다 설계예산서 (공사원가계산서, 내역집계서, 내역서, 일위대가표, 단가산출서, 공량산출서, 자재산출서, 공사기초산출조서, 각종 계산근거 등)

라. 설계도면

마. 각종 계산서

바. 공정표

사. 실시설계 종합보고서

아. 기타 범어사에서 요구하는 사항

2. 설계도서 작성기준

가. 공통사항

1) 기본설계에서 결정된 각종 시설의 형식 및 기준을 재검토하여 보고 후 최종 확정안에 대하여 세부 실시설계 도서를 작성한다.

2) 정보통신․전기․종합유선방송․주택건설기준․소방 등 관련 제반법규 및 규정 기준에 적합하여야 한다.

3) 기타 본 과업에 적용되어야 할 관련 기준 등

4) 설계용역자는 과업내용을 숙지하여 본 과업 내용이 적합하도록 하여야하며, 성과품 납품 시 또는 납품 후에라도 잘못된 사항 및 발주청 재 요구 사항이 있을 시에는 언제든지 즉시 보완 수정하여야 한다.

5) 설계도서 작성

가) 설계도서 작성은 범어사가 지정하는 규격으로 한다.

나) 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명하며, 문자는 한글사용을 원칙으로 한다.

다) 설계도서의 작성은 원고와 원도를 작성하여 발주처의 검사를 받은 후 인쇄하여야 한다.

라) 설계도면 작성을 위한 제도는 K.S.F/1001 제도 통칙에 준하여야 한다.

마) 평면도는 각 매설물, 구조물 등에 대한 상호 연관성을 고려하여 종합도 (축척1/200～1/600)를 작성하고, 축척(1/100～1/200) 내외인 세부평면도를 작성하되 각종 도면 여백에는 현장에서 시공이 용이하도록 시공 순서 및 주의사항 등을 표시하여야 한다.

6) 사용자재 조서

주요자재는 전기통신기본법의 형식승인 제품을 사용하고, 형식승인 대상제품이 아닐 경우, KS 표시품 및 국내표준 규격의 성능기준 규격에 적합한 제품을 사용하거나, 발주청과 협의하여 설계한다.

7) 동원인원 계획표, 장비 투입계획서, 소요 공기일수 산출은 공정, 일․월별로 작성하여야 하며, 계획 공정은 단계별, 공종별로 PERT/CPM방식에 의한 공정표를 작성 제출하여야 한다.

8) 예산서 작성

가) 수량 및 단가산출

- 수량 및 단가산출은 각각 별책으로 작성하되 공종별, 재료별로 산출하여 참조하기 편리하도록 작성하고, 공종별 단가는 일위대가표 및 단가산출서상에 구체적으로 명시되어야 한다.

나) 적용 품셈

- 최근 한국정보통신공사협회 제정 통신부문 표준품셈 및 건설교통부제정 표준품셈에 의거 산정한다.

- 노임은 최근 시중노임단가(대한건설협회 발표)를 기준으로 한다.

다) 설계도서 작성은 범어사의 발주계획상 필요에 의하여 공종별 작성 요구 시 이에 따라 구분한 설계도서를 제출하여야 한다.

9) 설계설명서

가) 설계설명서는 본 과업의 전체 순위를 정하여 아래와 같이 알아보기 쉽게 하여야 한다.

- 설비개요

- 과업의 특수성

- 세부 시공계획

- 세부 공정계획

- 기타 필요한 사항

나) 설계설명서에는 설계조건 적용 등 설계 특수사항을 표기하여야 한다.

다) 각 시설별 설명서는 정보통신분야 이외의 사항도 표기되도록 하여 전체적으로 설명되어야 한다.

10) 시방서

가) 일반시방서 : 공사관련 필요한 사항 및 유의하여야 할 일반적인 사항을 명시

나) 특별시방서

- 일반시방에서 기술되지 않은 내용으로 공사 집행 상 특별히 유의하여야 할 사항을 명시하며, 사용하고자 하는 기자재의 특성, 정격, 운용방법, 제작조건 및 기준 등을 명시

- 공종별, 기기별 누락 없이 상세히 기록

11) 설계내역서

가) 예산내역서

나) 공종별 세부내역서

다) 일위대가표

라) 수량산출서

마) 단가산출서

바) 기타 필요한 산출근거 (견적서, 제품 안내서, 취급설명서 등)

12) 설계도면

범례, 도면 목록을 작성하고 도면의 일부분에 품명, 수량, 용량, 사양, 기타사항을 표기한 일람표를 표기하여야 하며, 도면의 내용은 다음과 같다.

가) 배 치 도 : 기본설계 표시된 사항 구체화된 내용

나) 계 통 도 : 각 설비별 세부 계통도

다) 평 면 도 : 각 설비별 평면도, 기구 및 주요설비 확대 평면도

라) 단 면 도

마) 배관 및 배선도

바) 기계기구 및 설치 상세도

사) 블록다이어그램

아) 기    타 : 장비별 기초도, 부대시설 상세도 등 기타 필요한 도면

나. 정보통신분야

1) 공통사항

가) 주관부서 의견수렴 등 건축 도면을 고려한 후 설계에 임하여야 한다.

나) 각종 통신설비는 전력선과의 법적 이격거리 검토 설계

다) 장비별 부하계산 수치에 의한 각 SYSTEM별 단독전원 및 비상전원 확보 검토 설계

라) 각종 정보통신시설장비 및 기구 설치 시 미관 및 전기․기계설비 등과의 장애여부 검토 설계

마) 각종 기기 선정 시 장․단점 비교검토 설계

바) 각종 통신설비 규정에 의한 접지저항치 확보토록 접지설비 검토 설계

사) 각종 정보통신기기 배치 및 구성도 설계

아) 각 설비는 범어사의 요구 및 경제성, 안전성을 감안하여 설계하되 외관이 미려하고 기술기준에 적합하게 검토 설계

자) 기타 소방법에서 정하는 설비 검토 설계

2) 전화교환설비 및 네트워크(LAN) 설비

가) 사무실 면적 및 용도에 맞게 적합한 전화교환 및 네트워크 시스템 채택

나) 전화교환·네트워크 설비 소요용량 및 향후 증설을 대비한 시스템 설계

다) 각 단자함간 및 인입배관, 구내간선의 예비 배관․배선 설계

라) 전화, 네트워크, TV의 주 설비를 한곳에서 통합 관리할 수 있고 요건을 충족할 수 있는 충분한 공간 확보

마) 국선단자함, 중간단자함 등은 각 층마다 설치위치 선정 및 용량 산출

바) 통신용 인출구(통신, LAN)는 예비 포트를 포함한 적정 수량 검토 설계

3) TV(CATV) 공시청설비

가) TV 공시청 전계강도 측정치에 의한 TV 수신설비 설계

나) 증폭기의 성능을 고려, 수신자를 최대한 수용할 수 있도록 설치 위치를 선정하여 설계

다) 유휴분배 및 분기단자는 사용하는 선로에 영향을 미치지 않도록 75Ω으로 종단토록 설계

라) 케이블 및 기기의 경년 변화에 대비, 구내증폭기의 최대 이득을 감안하여 설계

마) 방송공동수신설비의 설치 기준에 관한 고시에 의한 설계 반영

4) A/V(방송, 영상)설비

가) 설치 목적별, 장소별을 검토하여 적정한 시스템이 구축되도록 검토 설계

나) 각 설비는 사용 장소에 따라 실내용적과 음의 잔향시간을 검토 설계

다) 전관방송(비상방송) 설비는 앰프출력이 스피커출력의 약 30%정도 예비 출력을 확보토록 설계

라) ATTENUATOR는 OFF 상태에서도 비상방송을 청취할 수 있도록 스피커 선로 외에 비상선로 1선이 추가되도록 설계

마) 수직·수평 배관·배선 규격 검토 설계

바) 전관방송 및 회의실(강의실) 방송 설비는 분리하여 설계

사) 영상설비는 실의 규모 및 사용목적 등을 고려하여 최적의 시스템으로 설계

5) 비 고

1)～4)사항 중 본 사업의 용도와 부적합한 시스템은 설계반영에서 제외해야하며, 정보통신시스템 운영 및 관련 법규상 필요하다고 판단되는 부분은 사전 협의하여 반드시 반영할 수 있도록 설계

다. 기타 사항

1) 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격작성준칙의 공사원가 계산방식에  의거 작성하되 적산 프로그램(EXCEL)으로 구성하여 작성한다.

2) 공사비 적산은 정부표준품셈, 시중노임단가, 부산광역시 건설공사 설계지침서 등에 의거 산출하되 사전 조사하여 작성한다.

가) 재료 단가 조사

- 본 공사에 소요되는 모든 자재는 각 품목, 품질 및 규격별 조사한다.

- 자재단가는 조달청 발행「가격정보」를 기준으로 하고 동책자에 없는 단가는 대한건설협회발행「거래가격」사단법인 한국물가협회 발행 「물가자료」사단법인 한국물가정보 발행「물가정보」중 서로 비교하여 최저가를 적용하며, 상기 책자에 없을 때에는 시중 거래실례가격(3개업체이상견적서 첨부)을 기준으로 한다. 단, 재료 및 자재단가 운반비가 포함되지 않는 경우 구입 장소로부터 현장까지 운반비를 계상할 수 있다.

- 사용자재는 전기통신기본법의 형식승인 제품 사용을 원칙으로 하며,  단, 국내에서 생산이 되지 않는 자재의 경우는 사용 계획, 사용처 및 사유를 알리고 이와 대체 할 수 있는 국내 제품과 비교 검토하여 적용한다.

나) 수량 산출

- 수량 산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에 부합되도록 적의 결정하여 적용한다.

- 공사규모, 공기 및 현장조건 등을 비교 검토하고 기계장비의 선택적조합의 합리성과 경제성을 비교하여 경제적이고 합리적인 공법을 채택 하여 적정 산정한다.

- 사용단위는 C.G.S단위로 하되 소수점이하 2위까지 하고 끝수는 반올림한다.

- 위의 모든 수량 산출에 관한 것은 착오가 없도록 하여야 한다.

다) 주요 자재

- 주요자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

- 형식승인품 및 K.S제품이 없는 제품 사용 시 공사조건에 맞는 관련 규격 및 시방서(외국규격 등) 등을 검토하여 사용토록 한다.

- 본 과업과 관련되어 공급한 설계자료와 기타 사항은 설계용역 수행을 위하여만 사용하고 잉여분은 발주청의 지시에 따라 반납하여야 한다.

- 발주청의 사정으로 수급의 원활을 위한 사전물량 파악이 있을 시 즉시 산출하여야 한다.

라) 산업재해 보상 보험요율

노동부에서 고시한 보험요율에 따른다.

마) 안전관리비

노동부 고시에 의한 건설교통부 표준안전관리비 산정기준에 따른다.

3. 실시설계 종합보고서

가. 본 종합보고서는 기본설계에서 실시설계 완료까지의 모든 과정에 걸쳐 논리적 ․사실적․기술적으로 작성되어야 하고 구조물의 특성과 용도의 개념을 명확하게 기술해야 하며, 관리운영에 관한 사항과 각실 면적 및 기능과 시설개요 등 각 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모하게 한다.

나. 보고서 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서 이어야 하며, 다음사항을 상세히 수록하여야 한다.

1) 과업의 목적

2) 과업의 내용

3) 사전조사 내용 요약

4) 설계기준

5) 구조물 설계안별 검토내용

6) 세부 설계내용 (공종별 비교검토 내역 포함)

7) 주요자재 및 수급계획

8) 시공 계획

9) 기타 참고자료

10) 기타 범어사의 요구사항

4. 공정표

가. 본 과업의 공사공정표는 공사기간 및 공사의 내용 파악이 용이하도록 세부공종이 상세히 나타나도록 작성한다.

나. 특기시방서에 명시된 공종 중 발주청이 지정하는 주요공종은 별도로 공정표를 작성한다.

5. 성과품 제출

가. 용역자는 과업완료 5일 이전에 아래 성과품을 납품하여야 한다.

나. 설계도면 및 시방서는 아래 제출서류 이외에 조달청에서 선정된 전산프로그램으로 저장된 CD-ROM을 제출하여야 한다.

1) 설계용역 보고서 - 10부

2) 설계도서 원도 및 원고 일체

3) 설계도서 - 각 10부

가) 설계설명서,  설계도면 A1(책자형),  A2(책자형)

나) 시방서 (일반, 특기, 자재, 기계장비)

다) 각 설비별 부하, 용량, 규격 설계계산서 (근거자료 포함)

라) 공사비 내역서

마) 수량산출조서

바) 단가산출조서

4) 기타 견적서, 제품 안내서 및 취급설명서 등

5) 각종 협의사항 자료 일체

다. 정부조달계약이 가능하도록 설계도면, 시방서등 정부시설 공사계약 요청 납부용으로 표준화된 프로그램을 사용하여 PC용 CD-ROM으로 납품하여야 한다.

라. 상기 외에 감독원의 지시 하에 추가되는 성과품의 종류 및 수량은 별도 작성 제출한다.

제6장 조경 분야

1. 과업수행 준수사항

가. 일반지침

1) 본 과업지시서는「선문화교육불교회관 건립사업」에 필요한 사항을 규정하며, 모든 작업은 과업지시서에 의해 수행하고 이에 명시되지 않는 사항은 관계 법령 및 각종 지침, 시 조례, 범어사 관련 규정 또는 정부 제정 표준시방서에 의거 감독원과 협의 후 수행하여야 한다.

2) 본 과업에 참여하는 기술진은 조경산업기사 이상의 전문가로서 조경 및 기타 관련 분야에 대하여 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 추진될 수 있도록 한다.

3) 본 과업 수행 시 건축법, 동법 시행령 및 시행규칙, 조경기준(국토해양부고시) 등 관련 법령 및 규정 등을 충분히 검토하여 설계하고, 설계서 작성 시

4) 수급인은 계약 체결 후 7일 이내에 작업에 착수하여야 하고 착수계, 현장대리인계, 참여기술자의 자격 및 경력, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

5) 과업의 진척 보고는 착수․중간․최종보고를 원칙으로 하고, 감독원이 필요하다고 판단 할 경우 추진사항을 수시로 보고해야 한다.

6) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 주요한 사항은 감독원과 협의하여 결정하여야 한다.

7) 본 과업이 완료된 후에도 각종 성과품의 미비 및 보완사항이 발생될 시는 용역업자 부담으로 즉시 보완 제출하여야 한다.

8) 용역감독자가 과업 수행 중 용역업자의 대리인이나 고용인이 과업 수행에 부적당하다고 인정할 때에는 즉시 교체를 명할 수 있다.

9) 본 과업수행 중 수급인이 제3자에게 피해를 주었을 경우 수급인이 손실보상을 하여야 한다.

10) 본 과업수행 상 발주청의 사정에 의해 일부 변경이 있을 시에는 발주청의 지시에 따라야 한다.

11) 아래와 같은 사유가 발생 시에는 용역감독자와 협의 후 용역기간을 조정할 수 있다.

가) 과업수행 중 정책적인 변화가 있을 시

나) 불가항력적인 사유가 발생하였을 경우

다) 발주청의 사정에 의한 작업 중지 또는 연기의 필요가 있을 때

라) 조사물량의 증가 등으로 용역기간 연장이 불가피할 때

마) 기타 현장의 부득이한 사정으로 연기가 불가피하다고 인정될 때

12) 설계변경 조건

가) 계획 변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

나) 기타 발주자가 필요하다고 인정할 때

13) 보안사항

가) 용업업자는 보안 대책을 수립하여야 한다.

나) 모든 성과품은 용업업자가 유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

다) 과업폐기물은 소각 처리 하여야 한다.

라) 기타 보안상의 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 용업업자가 진다.

14) 제1)호 내지 13)호에 명시한 내용을 위반하거나 용역감독자의 지시에 정당한 사유 없이 불이행하는 경우는 용역 중지를 명할 수 있다.

나. 성과품 작성(납품)

1) 설계내역서 각 5부 - 설계설명서, 설계내역서, 일위대가표, 단가산출서, 수량산출서, 가격조사표, 일반시방서, 특별시방서 등 포함

2) 설계도면 : 백도(A3) 5부

3) 성과품 내용이 기록된 CD 1장

2. 조경분야 실시설계

가. 일반사항

1) 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지 환경이 되도록 하고 건물, 주차장 등과 연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변 환경과 조화를 이루도록 계획하여야 한다.

2) 조경계획은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 계획하여야 한다.

3) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용 공간 등을 고려하여 적절한 위치를 선정하여 휴게 공간, 녹지 공간 등을 주변 환경과 조화롭게 계획하여야 한다.

4) 자연지형을 이용하여 주변 환경과 조화롭게 계획하여야 한다.

나. 조경 식재 설계

1) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

2) 식재 설계 시 성목이 되었을 때를 가정하여 각 수종에 적합한 식재밀도와 수목간격을 유지한다.

3) 지역적 특성과 지형의 고저 차에 따라 교목과 관목, 낙엽수와 상록수를 조화롭게 식재한다.

4) 식재설계는 장소의 특수성을 감안하여 여건에 맞는 식재방식을 이용하여 자유롭고 안정된 배식방법으로 채택한다.

5) 잔디는 전면 평떼로 피복함을 원칙으로 하고 주변상황 경사도, 장소의 중요성, 경제성 등을 감안하여 줄떼로 피복한다.

6) 생울타리는 시각의 차폐, 동선의 차단, 구조물의 경관완화 등을 위해 식재한다.

7) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 유기토로 토사 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

8) 방문객이 휴식하거나 모이는 장소는 녹음을 제공할 수 있도록 식재한다.

9) 주변의 경관 수목과 어울리도록 연속성이 있게 식재한다.

10) 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계하여야 한다.

다. 조경시설물·포장 설계

1) 벤치, 등의자, 파고라 등 시설물은 이용자의 이용이 극대화될 수 있는 위치를 반영한다.

2) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며, 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.

3) 산책로 또는 조경포장이 있는 경우에는 투수성 및 친환경적인 재료를 사용하여야 한다.

4) 포장재료는 경제성, 유지관리, 지반침하, 미관 등을 충분히 검토한 후 선정한다.

5) 파고라, 벤치, 조경시설물 등의 디자인과 설치 위치는 발주청과 협의하여 결정한다.

6) 인간공학에 바탕을 둔 기능적 스케일로 설치상황에 적합한 치수를 선택한다.

7) 조경시설물의 재료는 현대적인 인공재료는 가급적 피하고 자연재료를 이용한 시설물이 되도록 한다.

3. 도서작성 방법

가. 원도 및 설계도

1) 원도 및 설계도라 함은 계획서의 확정 작성 후 공사 이행이 가능하도록 세부적이며 규격화된 일체의 도면을 칭함

2) 모든 도면은 AUTO CAD로 작성

나. 시방서

1) 분야별 공종별로 세분하여 작성하며 설계도상에 기재되지 않은 일반사항과 특수공법을 요하는 것을 특별 시방서에 상세히 기록

2) 본 시방서는 토목, 조경 전문 시방서에 준하여 작성

다. 내역서

1) 공사원가 계산은 기획재정부에서 정한 “원가계산에 의한 예정가격 작성준칙”에 의거 작성

2) 국내 자재단가는 조달청 고시가격을 우선 적용하고 기타 정부공인기관 발행 물가자료 또는 물가정보 등 물가의 가장 낮은 단가를 적용

3) 물가 시세표에 표시되지 않은 품목은 생산업체의 원가 조사서가 첨부된 2개 이상의 견적서에 의거하되 낮은 단가를 적용

라. 예정공정표 : 절대공기를 계산하되 주 공정 순으로 작성

마. 성과품 작성(납품)

1) 설계내역서 각 10부 - 설계설명서, 설계내역서, 일위대가표, 단가산출서, 수량산출서, 가격조사표, 일반시방서, 특별시방서 등 포함

2) 설계도면 : 백도(A3) 10부

3) 성과품 내용이 기록된 CD 1장